● LAS bKAGRA Phase-2以降スケジュール相談

・日時: 2017/9/29(金) 13:30-15:15  東京大学 工学部 6号館 325号室
・参加: 三尾, 苔山, 宮川, 内山,  安東                
・内容: 
    bKAGRA Phase-2以降に向けてのLASスケジュールの情報収集・相談
     * これまでの経緯復習・現状把握
     * LASのスケジュール
     * 他サブシステムと関係での要確認事項・前提タスクの洗い出し

・LASスケジュールの概要: 
   - 2018.5-8に 40W KAGRAインストール.
     Phase-2期間中は 40Wレーザーをパワー調整して干渉計動作に使用.
   - Phase-3期間中に時期を見て 80W化 (コヒーレント加算)を目指す.
   - Phase-3観測運転後に >100W (固体増幅器) を目指す.
・A/I:
   - LASスケジュールを提出 (三尾).
・要調整項目
   - 準備・設置に 2 FTE 相当が必要.
  - チラー用一次冷却水はレーザーブース外にある. 水量の容量確認 (FCL).

---- 以下詳細 -----------------------------------------------------

・現状把握
  * NPRO+ファイバ増幅器 40W + チラー : いつでも納品可 
     - 基本的にはそのまま動く. 立ち上げの相談は必要. 専任マンパワーの問題.
     - デジタル系との接続・インターフェースは要相談. -> 基本的に大丈夫だろう.
     - 単相100V電源.
     - NPRO-ファイバー増幅器の間に EOMをいれるか要相談.
     - 納品用と開発用独立2セットある. 
       NPRO 2台, ファイバ増幅器 3台, チラー2台
  * NPRO+ファイバ増幅器 2台 コヒーレント加算 80W 
     - 概ね準備完了. 多少の熟練が必要なので, 専門の研究者が必要.
     - 2018年度以降なら納品可能.
  * NPRO+ファイバ増幅器 2台 コヒーレント加算 + 固体増幅器 150W.
     - 2020年度を目標.
     - 固体増幅器の予備はない.

・Phase-2 のスケジュール
    - 2018年5-8月に 40W KAGRA設置を目指す. 
      事前(2017年度内)に仮組み, 動作試験などを本郷で行う. 
      その際, IOO側担当者も現物を見ておくことが重要. -> 中野くん(?)と相談.
      その先も見越したマンパワー体制が望ましい. 会社に頼む可能性もあるか.
    - 80W化はKAGRA運転からの要望で準備可能. 
      2019年度以降にタイミングを見つけて行うことも可能. 
      コヒーレント加算で強度雑音が悪くなるという経験がある (~1week).
      それを実行する人が必要.
    - Phase-3後に >100Wレーザーの設置を見通す.

・要検討事項・メモ
  - レーザーの運用方針・体制: オペレータの配置, 安全, 故障時対応 など.
  - 干渉計入射パワー要求値から LASとIOOへの要求値ブレークダウン.
  - 干渉計のアンロック・復帰の際のパワー制御をどう行うか. 
     PDの保護, 光源自体のOFF.
     -> 光源のインターロック + 市販のメカニカルシャッター + 波長版・PBS の組み合わせ.  
          LASのアドバイスのもと IOO(レーザー担当)で検討 + DGS, MIFとインターフェース相談.
  - 固体増幅器の予備がない.
  - PSLテーブル上の High-power光源設置場所  1150 x 1750 mm
  - チラー用一次冷却水はレーザーブース外にある. 容量確認 (FCL).

--------------------------------------